기술용역계약 특수조건

주칠레(대) 청사 그린리모델링 건설사업관리용역

제1조(목적) 이 「기술(설계)용역계약 특수조건」(이하 “특수조건”이라 한다.)은 주칠레대사관 계약담당공무원과 계약상대자가 체결하는 건설사업관리용역(이하 “관리용역”) 계약의 내용을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) ① 이 특수조건에서 사용하는 용어의 정의는 달리 정하는 경우를 제외하고는「기술(설계)용역계약 일반조건」에서 정한 바에 따른다.

② 일반조건 제24조(불가항력)중 “대한민국 국내”는 “대한민국 및 칠레 국내”로 해석한다.

③ 이 특수조건에서 말하는 “현지”라 함은 실제로 공사가 수행되는 칠레 산티아고를 의미한다.

제3조(용역기간) ① 본 관리용역기간은 계약 체결 후 착수일로부터 390일로 하며, 현지 상황 변화에 따라 발주처와 협의하여 별도 가산할 수 있으나, 동 사유로 인한 기간 연장에 따른 용역비용 증가는 청구할 수 없다.

② 발주처의 요청으로 인하여 발생된 지연사유가 있을 때에는 발주처와 계약상대자간의 별도 협의 하에 기간을 연장할 수 있다.

제4조(참여 기술자) 계약상대자는 착수신고서 제출 시 상주 및 비상주 감리원에 대해 구체적인 업무수행내용, 주민등록번호, 소지한 자격증 등을 명기한 참여기술자 명단, 참여기간, 경력사항 등을 작성, 제출하여야 한다.

제5조(대금지불) ① 용역대가는 선금으로 40%를 지급하고, 이후 용역수행에 따라 분기별 기성으로 대금을 지급할 수 있다. 단, 선금지급 비율은 발주처 사정에 따라 변동될 수 있으며, 기성 지급시기는 발주처와 협의할 수 있다.

② 용역대가는 미불로 표시하고 발주처가 계약상대자에게 지불한다.

③ 용역금액은 업무량의 상당한 증가가 이루어지지 않을 경우를 제외하고는 동 금액의 조정을 할 수 없다.

③ 상기 명시하지 않은 선금지급에 대한 사항은 기획재정부 계약예규 정부입찰  계약집행기준 제10장(선금의 지급 등)에 따른다.

제6조(지체상금) 계약상대자는 발주처의 동의 없이 용역수행이 지연되었을 경우, 지체일수 매 1일마다 계약금액의 1000분의 1.25에 해당하는 지체상금을 발주처에 현금으로 납부하여야 한다.

제7조(용역계약 중지 및 변경) 발주처는 용역업무의 일부 또는 전부의 이행을  일시 중단시키거나 변경할 수 있으며, 계약상대자는 발주처의 요구에 응하여야  한다. 이 경우에는 중단시점까지 작성된 성과품에 대한 보수를 정산 지급할 수 있다.

제8조(현지상주) ① 상주감리원은 시공 현장 내에 가설사무소에 상주하여야 하며, 상주감리원의 현장상주 시기는 시공일정을 감안하여 발주처와 협의할 수 있다.

② 계약상대자는 용역기간 동안의 휴가 시 일자는 발주처와 협의하여야 한다.

③ 상주감리원의 휴가기간 동안 업무공백이 발생하지 않도록 업무대체자를 현지에 파견하여 동 기간 동안 업무를 수행토록 하여야 한다. 단, 보조감리원이 현장에 상주하여 업무를 수행하는 경우 동 관리자가 대체할 수 있다.

제9조(착수신고서 등 제출) 계약상대자는 착수일로부터 7일 이내에 착수신고서와 15일이내에 책임감리용역 종합수행계획서를 제출하여야 한다.

제10조(용역업무 보고) 계약상대자는 용역업무에 대한 월간보고서를 작성하여 추진상황을 발주처에 보고하여야 하며, 발주처는 필요시 수시보고를 하도록 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에 응하여야 한다.

제11조(보고서 작성) ① 계약상대자는 본 용역에 따른 보고서 작성은 과업내용서 에 따라 작성하여야 하며, 동 내용서에 명시된 제출시기에 제출하여야 한다.

② 계약상대자는 월간 및 최종 보고서의 내용은 과업내용서에 정한 바에 따른다.

제12조(보안관리) ① 계약상대자는 재외공관 시설임을 감안하여 보안 관리에 대한  발주처의 관련지침을 준수하여야 하며, 필요한 제반조치를 취하여야 한다.

② 계약상대자 또는 계약상대자의 사용인은 본 용역 수행중 인지하는 모든  사항에 대해 누설하여서는 안 되며, 이를 위반하여 발주처에 테러 및 보안상 위험 등으로 손해가 발생하였을 경우, 계약상대자는 모든 민․형사상 등의 모든 법적 및 손해배상 책임을 진다.

③ 계약상대자는 보안관리상 문제가 발생하지 않도록 하여야 하며, 현장대리인의 책임하에 모든 관련자에 대한 보안관리를 위한 필요 제반조치를 취하여야 한다.

제13조(해약 및 손해배상) 본 계약의 아래사항에 대하여 발주처는 계약상대자와의 계약을 해지할 수 있으며, 계약상대자는 발주처의 손해를 모두 보상하여야 한다.

① 계약 또는 과업내용을 위배하였을 경우

② 성실한 이행을 하지 않거나 용역기간내에 과업을 이행하지 못하였을 경우

③ 기타 계약상대자가 본 과업을 수행할 수 없는 상황이 발생하였을 경우

④ 관리 감독의 소홀로 사업계획에 차질이 발생할 경우

제14조(재해보상) ①현지 사정을 감안, 관리용역 기간 동안 천재지변, 전쟁, 사변, 내란, 폭동, 납치, 그 밖에 예기하지 못한 돌발 사태로 인하여 참여기술자가 사망․실종되거나 신체상․정신상 또는 재산상 뚜렷한 피해를 입은 경우와 현지 기후․풍토, 그 밖의 생활조건으로 인하여 발생한 질병으로 사망하거나 장애인 된 경우를 대비하여 계약상대자는 참여기술자에 대해 적절한 보험 가입 등의 조치를 반드시 취함으로써 상기 피해 발생에 대한 모든 책임을 진다.

② 상주감리원의 보험가입서는 착수신고서 제출 시 포함되어야 하고, 비상주 감리원은 출장 전에 가입하여 발주처에 제출하여야 하며, 가입비용은 발주처와 협의하여 추후 실비정산 한다.

제15조(기타) ① 기타 조건은 기술용역계약 일반조건에 따른다.

② 기타사항에 대하여는 일반관례에 따라 발주처와 계약상대자간의 협의에 의  하여 조정할 수 있다.